11

특수공시

특수공시 사업 목록

연번	사 업 명	추 진 부 서	비 고
	15개 사업	10개 부서
1	고하도 해상데크 보행약자 시설 개선 사업	관 광 과
2	목포문학박람회	문화예술과
3	목포종합경기장건립	교육체육과
4	해상풍력 융복합산업화 플랫폼 구축	지역경제과
5	전기추진차도선 및 이동식 전원공급시스템 개발
6	친환경선박 혼합연료 기술개발 및 실증
7	수산식품수출단지조성	수산진흥과
8	목포수협 활어위판장 신축
9	목포수협 수산물 유통물류 센터
10	평화광장리모델링사업	도시계획과
11	도서지역 상수도 해저관로 매설공사	수도과
12	임성재해위험지역정비사업	하수과
13	1897 개항문화의 거리 조성	도시재생과
14	해변맛길 30리 조성사업	공원녹지과
15	고하도 목화정원 조성사업

고하도 해상데크 보행약자 진출입 개선사업

경사도 높은 계단으로 연결된 해상데크의 거동 불편한 보행약자에 대한 이동편의 제공 및 접근성 향상을 위한 진출입 여건 개선

□ 개  요

❍ 기    간 : 2020. ~ 2022.

❍ 위    치 : 목포시 달동 산191-4번지(고하도 해안 일원)

❍ 총사업비 : 2,350백만원 (특교세 1,100 도 950 시 300)

- 2021년 사업비 : 1,250백만원 (도 950 시 300)

❍ 사업내용 : 경사형 엘리베이터 설치 L=54m(20인승)

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2021년	2022년	2023년이후
계	2,350	1,100	1,250	-	-
특교세	1,100	1,100	-	-	-
도비	950	-	950	-	-
시비	300	-	300	-	-

□ ‘21년까지 추진실적

❍ 행안부 특별교부세 교부(국비 1,100백만원)      : 2020.  8.  6.

❍ 기본 및 실시설계 용역 착수                  : 2020.  9. 24.

❍ 건설기술심의 위원회 심의완료                : 2021.  4. 19.

❍ 토목공사 계약 및 착공                       : 2021.  6. 22.

❍ 조달청 관급자재(엘리베이터)계약 및 착수      : 2021. 11. 30.

❍ 전기, 통신공사 계약 및 착공                 : 2021. 12.  6.

❍ 편입토지(2필지) 사용(무상)협의 완료            : 2021. 12. 27.

❍ 해역이용 협의 및 공유수면허가 신청        : 2021. 12. 29.

□ 향후 추진계획

❍ 엘리베이터 제작설치                         : 2022. 7. ~ 8.

❍ 사업 준공                                   : 2022. 9.

□ 위 치 도

사업위치

전망대

승강장

주탑

해상데크(1,818m)

□ 완공사진 (조감도)

목포 문학 박람회 개최

문학을 주제로 축제와 박람회를 연계해 문학박람회를 개최하여 문화의 도시브랜드 확보 및 문학의 관광자원화로 지역경제 활성화에 기여 하고자 함

□ 개  요

○ 기    간 : 2021. 10. 7.(목) ~ 10.(일)【4일간】

○ 위    치 : 3개 권역(목포문학관 일원, 평화광장, 목원동 일원)

○ 총사업비 : 1,500백만원 (국 500 도 700 시 300)

- 2021년 사업비 : 1,500백만원 (국 500 도 700 시 300)

○ 사업내용 : 축제와 박람회 연계한 문학 행사, 전시, 4인4색문학제, 공연,

체험, 웰니스테라피존, 문학관광상품 운영 등 총 109개 프로그램

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2021년	2022년	2023년이후
계	1,500	-	1,500	-	-
국비	500	-	500	-	-
도비	700	-	700	-	-
시비	300	-	300	-	-

□ ‘21년까지 추진실적

○ 2021. 8. : 목포문학박람회 성공개최 유관기관 업무협약 (9개 기관)

○ 2021. 10.: 목포문학박람회 109개 프로그램 추진

○ 2021. 11.: 목포문학박람회 성과 평가 (직접경제효과 40억원)

□ 향후 추진계획

○ 2023 문학박람회 개최 준비 및 행사 개최

□ 기대효과

○ 전국 최초 문학박람회 개최를 통한 문학의 도시브랜드 확보

○ 목포문화유산과 문학의 만남을 통한 목포 재발견 및 문학힐링공간 조성

□ 관련 사진

문학박람회 배치도
행사장 전경	개막식

목포 종합경기장 건립

전남 서남권의 중심인 우리시가 2023년 전국체전 주 개최지로 확정됨에 따라 완벽한 대회 개최를 위해 목포 종합경기장 건립 추진

□ 개  요

○ 기    간 : 2019. 12. 9. ~ 2023. 7. 25.

○ 위    치 : 목포시 대양동 산 124번지 일원

○ 총사업비 : 92,000백만원 (국 20,000 도 23,000 시 49,000)

- 2021년 사업비 : 27,000백만원 (국 8,000 도 5,000 시 14,000)

○ 사업내용 : 부지 172천㎡(종합 및 보조경기장 건립, 관람석 16,468석)

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2021년	2022년	2023년이후
계	92,000	37,400	27,000	27,600	-
국비	20,000	8,000	8,000	4,000	-
도비	23,000	13,000	5,000	5,000	-
시비	49,000	16,400	14,000	18,600	-

□ ‘21년까지 추진실적

○ 2021. 11. ~ : 건축 기초 터파기 추진

○ 2021. 11. 30 : 토석 반출 완료

□ 향후 추진계획

○ 2022. 7. ~ 2023. 7. : 공사 추진(PC공사․스탠드 설치공사, 운동장 조성공사 등)

○ 2023. 10. : 전국체전 개최

□ 기대효과

○ 2023년 제104회 전국체전 개․폐회식과 육상경기장으로 사용될 종합경기장 적기 준공으로 차질 없는 전국체전 개최 준비 및 축제 분위기 조성

□ 위 치 도

□ 완공사진 (조감도)

해상풍력 융복합산업화 플랫폼 구축

전남형 상생 일자리 사업 등으로 추진 중인 대규모 해상풍력 발전단지의 민간투자 촉진 및 지속가능한 산업화 지원체계 구축

□ 개  요

○ 기    간 : 2020 ~ 2024(5년간)

○ 위    치 : 목포 신항 일원 (달동 1330-63)

○ 총사업비 : 35,700백만원 (국 17,000, 도 5,700, 시 11,700, 민 1,300)

- 2021년 사업비 : 4,630백만원 (국 4,000, 도 100, 시 100, 민 430)

○ 사업내용 : 해상풍력산업 활성화, 연구개발 및 기업지원 체계 구축

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2021년	2022년	2023년이후
계	35,700	3,620	4,630	6,910	20,540
국비	17,000	3,000	4,000	3,500	6,500
도비	5,730	-	100	234	5,396
시비	11,670	-	100	2,926	8,644
민자	1,300	620	430	250	-

□ ‘21년까지 추진실적

○ 관련기관 전문가 기획 회의(’20. 1. ~ 4.)

○ R&D 부문 사업 확정 및 연구개발 착수(’20. 6.)

○ 비R&D 부문 사업 지정과제 공고 및 응모(‘21. 11.)

○ 비R&D 사업	추진 협약 체결 및 사업 착수(‘21. 12.)

□ 향후 추진계획

○ 목포 신항 플랫폼센터 부지 매입(’22. 4.)

○ 목포 신항 물류인프라 및 통합관제시스템 구축(’22. ~ ‘24.)

□ 기대효과

○ 탄소중립 실현을 위한 대규모 해상풍력단지 건설 및 운영지원 항만물류 체계 구축

○ 해상풍력 관련 대형 구조물의 통합관리를 위한 공공인프라 구축

□ 위 치 도

□ 해상풍력 통합지원센터 조감도(안)

전기추진차도선 및 이동식 전원공급시스템 개발

IMO(국제해사기구)의 선박 대기오염에 대한 배출규제 강화 등에 대응하고 지역의 강점을 살린 친환경 선박 산업 생태계 전환 추진

□ 개  요

○ 기    간 : 2020 ~ 2024 (5년간)

○ 위    치 : 목포 남항 일원 (용해동 1059)

○ 총사업비 : 45,070백만원 (국 26,800, 도 3,600, 시 5,400, 민 9,270)

- 2021년 사업비 : 20,680백만원 (국 12,730, 도 1,440, 시 2,160, 민 4,350)

○ 사업내용 : 전기추진차도선 개발 및 실증, 이동교체식 전원공급시스템 기술 개발

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2021년	2022년	2023년이후
계	45,070	12,350	20,680	4,884	7,156
국비	26,800	7,220	12,730	2,154	4,696
도비	3,600	1,080	1,440	640	440
시비	5,400	1,620	2,160	960	660
민간	9,270	2,430	4,350	1,130	1,360

□ ‘21년까지 추진실적

○ 사업계획 신청 및 선정(’20. 2. ~ 3.)

○ KRISO 연구거점 유치 확정(‘21. 4.)

○ 친환경선박 생태계 조성 산학연관 업무협약식(’21. 7.)

□ 향후 추진계획

○ 전기추진차도선 건조 완료 및 진수식(‘22. 3.)

○ 남항 연구인프라 구축 착공식(’22. 하반기)

○ KRISO 연구본부 및 UST 캠퍼스 유치 및 운영(‘23. 12. ~)

□ 기대효과

○ KRISO 연구본부 및 UST 캠퍼스 운영을 통한 친환경선박 산업 경쟁력 확보

□ 위 치 도

□ 전기추진차도선

친환경선박 혼합연료 기술개발 및 실증

친환경 대체연료 신기술의 선박 적용성과 신뢰성 및 안정성을 확보, 검증할 수 있는 해상테스트베드 활용으로 산업 활성화 및 국제 경쟁력 강화

□ 개  요

○ 기    간 : 2021 ~ 2025 (5년간)

○ 위    치 : 목포 남항 일원 (용해동 1059)

○ 총사업비 : 41,480백만원 (국 29,000, 도 4,000, 시 6,000, 민 2,480)

- 2021년 사업비 : 7,530백만원 (국 5,700, 도 720, 시 800, 민 310)

○ 사업내용 : 친환경 혼합연료 기술개발, 신기술 실증지원 해상테스트베드 구축

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2021년	2022년	2023년이후
계	41,480	-	7,530	10,400	23,550
국비	29,000	-	5,700	7,300	16,000
도비	4,000	-	720	880	2,400
시비	6,000	-	800	1,490	3,710
민간	2,480	-	310	730	1,440

□ ‘21년까지 추진실적

○ 지정과제 공고 및 응모(’21. 2. ~ 3.)

○ 사업수행기관 선정평가(전담기관⇒신청기관)(‘21. 3.)

○ 사업수행 협약체결 및 1차년도 사업추진(’21. 4.)

○ 대체연료 해상실증 기법 및 절차 개발(‘21. ~ ’23.)

□ 향후 추진계획

○ 해상테스트베드 구축 및 실증 운영(‘22. ~ ’25.)

□ 기대효과

○ 해상테스트베드 구축을 통한 선박용 친환경 연료의 도입 촉진

□ 해상테스트베드 개념도

□ 해상테스트베드 조감도

어촌뉴딜 300사업(고하도항)

어촌 해상교통시설 현대화 및 핵심자원을 활용한 해양관광 활성화를   통한 어민의 지속가능한 소득기반 창출 및 소득주도성장 실현

□ 개  요

○ 기    간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.

○ 위    치 : 목포시 고하도 일원

○ 총사업비 : 12,341백만원 (국 8,638 도 1,111, 시 2,592)

- 2021년 사업비 : 2,467백만원 (국 1,727, 도222, 시 518)

○ 사업내용 : 공통사업1식, 특화사업 1식, 지역역량강화사업 1식

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2021년	2022년	2023년이후
계	12,341	-	2,467	4,936	4,937
국비	8,638	-	1,727	3,455	3,456
도비	1,111	-	222	444	445
시비	2,592	-	518	1,037	1,036

□ ‘21년까지 추진실적

○  ‘21.  4. : 공통사업(고하도항 선착장 정비사업 실시설계 용역) 착수

○  ‘21.  5. : 기본계획 수립용역 착수

○  ‘21. 12. : 기본계획 고시(목포시 공고 제2021-216호)

□ 향후 추진계획

○ ‘22. 3. : 공통사업 (고하도항 선착장 정비사업) 착공

○ ‘22. 4. : 특화사업 (공공건축물 설계용역) 착수

□ 기대효과

○ ‘23. 1. : 특화사업 착공

□ 위 치 도

□ 완공사진 (사업계획도)

수산식품 수출단지 조성사업

지역 수산물을 활용한 고부가가치 수산식품산업 육성 및 수출전진 기지 조성으로 수산산업 경쟁력 확보

□ 개  요

○ 기    간 : 2020년 ~ 2022년

○ 위    치 : 목포시 대양동 1176-1번지외 1필지(대양산단)

○ 총사업비 : 108,890백만원(국 71,121 도 15,240.5 시 15,240.5)+용지비 7,228(시비)

- 2021년 사업비 : 1,429백만원 (국 1,000 도 214.5 시 214.5)

○ 사업내용 : 마른김거래소, R&D시설, 냉동‧물류창고, 가공공장, 수출지원시설 등

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2021년	2022년	2023년이후
계	108,890	10,708	1,429	14,286	82,467
국비	71,121	2,394	1,000	10,000	57,727
도비	15,240.5	513	214.5	2,143	12,370
시비	22,528.5	7,071	214.5	2,143	12,370

□ ‘21년까지 추진실적

○ ‘16.  5. : 수산식품 수출단지 조성 연구용역(전라남도)

○ ‘17.  3. : KDI 예비타당성조사 (면제 -‘19. 1.)

○ ‘19. 7 ~ 10. : 사업계획 적정성 검토 및 중앙투자심사 완료

○ ‘20. 12. : 기본계획 수립용역 완료 및 고시

○ ‘21.  7. : 기본 및 실시설계 용역 착수

○ ‘21.  8. : 감독권한대행 등 건설사업관리 용역 착수

□ 향후 추진계획

○ ‘22.  6. : 중간설계 적정성 및 경제성 검토 완료(조달청)

○ ‘22.  8. : 기본설계 완료에 따른 기획재정부 총사업비 조정협의(1차)

○ ‘22. 12. : 실시설계 및 기획재정부 총사업비 조정협의(2차) 완료

○ ‘23.  1. ~ : 공사발주를 위한 행정절차 이행

○ ‘23.  6. ~ ‘25.  4. : 공사 착공 및 준공

□ 위 치 도

대양산단

수산식품

수출단지

□ 조 감 도

목포수협 활어위판장 신축

활어위판물량 증가에 따른 위판장 부족 현상이 초래되고 있어 균특회계 전환사업으로 추가 구축하는 사업임

□ 개  요

○ 기    간 : 2021년~ 2022년

○ 위    치 : 죽교동 620-321번지

○ 총사업비 : 5,000백만원 (도 1,500 / 시 1,500 / 자부담 2,000)

- 2021년 사업비 : 2,167백만원 (도 650 / 시 650 / 자부담 867)

○ 사업내용 : 위판장(수조 45개), 해수취수시설, 어업인휴게실 등

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2021년	2022년	2023년이후
계	5,000	-	2,167	2,833	-
도비	1,500	-	650	850	-
시비	1,500	-	650	850	-
자부담	2,000	-	867	1,133	-

□ ‘21년까지 추진실적

○ ’21.  2. : 활어위판장 타당성 용역 완료(수협)

○ ‘21.  9. : 기본 및 실시설계용역 완료(수협)

○ ‘21.  9. : 비관리청 항만개발사업 시행 허가(해수청)

○ ‘21. 10. : 비관리청 항만개발사업 실시계획 승인(해수청)

○ ‘21. 12. : 공사 착공(수협)

□ 향후 추진계획

○ ‘22. 7. : 활어위판장 신축공사 준공(수협)

○ ‘22. 8. ~ : 보조금 정산 및 위판장 운영(수협)

□ 기대효과

○ 거점 위판장 역할을 통한 활어유통 경쟁력 강화로 지역경제 활성화

□ 위 치 도

북항활어위판장 예정지

현 활어위판장

북항 씨푸드타운

□ 완공사진 (조감도)

목포수협 수산물 유통･물류센터

어획량 증가 및 관내 제빙공장 폐업에 따라 부족한 냉동·냉장(제빙·저빙)시설 확충하고 유통 기반시설 확충과 유통구조 개선을 도모하고자 함.

□ 개  요

○ 기    간 : 2021년 ~ 2022년

○ 위    치 : 목포시 죽교동 674-3

○ 총사업비 : 19,200백만원 (도 9,600  시 4,800  자부담 4,800)

- 2021년 사업비 : 820백만원 (도 410  시 205  자부담 205)

○ 사업내용 : 수산물 냉동․냉장 및 제빙․저빙시설 확충

○ 사업주체 : 목포수산업협동조합

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2021년	2022년	2023년이후
계	19,200	-	820	18,380	-
도비	9,600	-	410	9,190	-
시비	4,800	-	205	4,595	-
자부담	4,800	-	205	4,595	-

□ ‘21년까지 추진실적

○ 타당성 조사 용역(목포수협)             : ′20. 11. ~ ′21. 2.

○ 전라남도 지방재정 투자심사                    : ′21.  5.

○ 항만공사 시행허가 승인(해수청)                : ′21. 10.

○ 사업계획 변경 승인(전라남도)                  : ′21. 11.

- 사업규모 축소(6,600→5,151m2)

○ 기본 및 실시설계용역 완료(목포수협)           : ′21. 11.

□ 향후 추진계획

○ 공사 준공(목포수협)                           : ′22.  10.

□ 기대효과

○ 대량 생산 되는 수산물에 비해 부족한 유통기반 시설 확충

□ 위 치 도

□ 완공사진 (조감도)

평화광장 리모델링 사업

목포 관광특구(‘07.9.27.)로 지정된 평화광장 기능개선으로 서남권 최대 도심속 친수공간으로 재창조하여 관광인프라 구축 및 관광객의 만족도 향상에 기여

□ 개  요

○ 기    간 : 2019. 12. ~ 2021. 6.

○ 위    치 : 목포시 평화광장 일원

○ 총사업비 : 5,000백만원 (국 867,  도 1,633 시 2,500)

- 2021년 사업비 : 2,775백만원 (도 1,388, 시 1,307)

○ 사업내용 : 차도와 인도, 녹지공간 재조정 L=1.2㎞, B=40m

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2021년	2022년	2023년이후
계	5,000	2,225	2,775	-	-
국비	867	867	-	-	-
도비	1,633	245	1,388	-	-
시비	2,500	1,113	1,387	-	-

□ ‘21년까지 추진실적

○ ‘20.  4.     : 교통영향평가 심의 및 하당지구단위계획 결정(변경)

○ ‘20.  6.     : 공사 발주

○ ‘21.  6.     : 준공

□ 기대효과

○ 「근대역사문화공간」과 「해상케이블카 개통」과 연계하여 증가될 외부 관광객과 지역주민의 보행환경을 개선하고 시너지 효과로 거리 및 상권 활성화에 기여

○ 하당신도심 쇠퇴에 대비한 지역 활성화 촉진 및 서남권 최대 도심 친수공간을 관광 자원화하여 해양관광도시로서 이미지 제고

□ 완공사진 (조감도)

도서지역 상수도 해저관로 매설공사

지하수 수량감소 ‧ 염분유입 등으로 생활용수가 부족한 도서지역(율도, 달리도, 외달도)에 해저관로를 매설하여 지역 주민들의 식수난 해결

□ 사업개요

○ 기    간 : 2017년 ~ 2022년

○ 위    치 : 목포시 유달동 도서지역(장좌도, 율도, 달리도, 외달도)

○ 총사업비 : 18,193백만원 (국 12,735 도 1,107 시 4,351)

- 2021년 사업비 : 4,714백만원 (국 3,300 도 1,414 시 424)

○ 사업내용 : 관로신설 D=80~150mm, 14.8km(해저 4.8, 육상 10)

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2021년	2022년	2023년이후
계	18,193	7,321	5,742	5,130	-
국비	12,735	7,180	4,109	1,446	-
도비	1,107	14	907	186	-
시비	4,351	127	726	3,498	-

□ ‘21년까지 추진실적

○ ’18. 10월 : 일반수도사업인가 승인(전라남도)

○ ‘18. 12월 : 기본 및 실시설계용역 완료

○ ’19. 11월 : 공사 착공

○ ‘20. 10월 : 장좌도 용수공급

○ ’21. 10월 : 율도 용수공급

□ 향후 추진계획

○ ‘22.  3월 : 달리도 용수공급

○ ’22.  6월 : 외달도 용수공급

○ ‘22.  8월 : 부지정리 및 해저관로 매설공사 전체 준공

□ 기대효과

○ 도서민의 식수 및 생활용수의 안정적 공급으로 물 복지 실현

○ 용수공급 기반시설 확충으로 섬 지역 개발활성화 기여

□ 위 치 도

완료

해저관로(북항~장좌도)

D150, L=1.3㎞

해저관로(장좌도~율도)

D150, L=1.1㎞

해저관로(율도~달리도)

D100, L=1.4㎞

해저관로(달리도~외달도)

D100, L=1.1㎞

D150, L=1.8㎞

D80, L=2.9㎞

D80, L=0.3㎞

D100, L=2.9㎞

D80, L=1.7㎞

D80, L=0.3㎞

D100, L=0.3㎞

임성재해위험지역 정비사업

홍수시 도심을 관류하는 소하천의 범람우려 및 내수배제 불량으로 발생하는 상습침수에 대해 도시침수 방재대책으로 안전한 도시환경 조성

□ 개  요

○ 기    간 : 2021년~2024년

○ 위    치 : 삼향천 ~ 임성천 일원

○ 총사업비 : 20,000백만원 (국 10,000, 시 10,000)

- 2021년 사업비 : 1,200백만원 (국 400, 시 800)

○ 사업내용

- 중계배수펌프장 1개소 및 맨홀펌프 1개소 설치

- 소하천 정비 3.58km, 교량(선곡교) 개선 등

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2021년	2022년	2023년이후
계	20,000	-	1,200	2,516	16,284
국비	10,000	-	400	1,458	8,142
도비	-	-	-	-	-
시비	10,000	-	800	1,058	8,142

□ ‘21년까지 추진실적

○‘20. 10. : 자연재해위험개선지구 지정·고시

○‘21. 04. : 기본 및 실시설계용역 착수

○‘21. 08. : 소규모 환경영향평가 용역 착수

○‘21. 12. : 기본설계(안) 사전협의(행정안전부)

□ 향후 추진계획

○‘22. 12. : 행정절차 완료(사전설계검토, 기술심의 등)

○‘23. 01. : 정비사업 공사 추진

□ 위 치 도

1897 개항문화거리 도시재생 뉴딜사업

목포 원도심 지역 정체성 강화 및 사회․경제적 성장기반 확충 등을 통한 주민 삶의 향상 등으로 도시경쟁력 제고

□ 개  요

○ 기    간 : 2018년 ~ 2022년 (5년간)

○ 위    치 : 목포시 만호동 일원 / 294,831㎡

○ 총사업비 : 31,650 백만원 (국 150 시 100 기타 66.5)

- 2020년 사업비 : 2,422백만원 (국 1,690 시 732)

○ 사업내용 : 개항문화거리 관광루트개발 등 9개 마중물 사업

□ 연도별 투자계획                            (단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2020년	2021년	2022년이후
계	25,000	10,267	2,422	8,130	4,181
국비	15,000	6,160	1,690	4,641	2,509
도비	-	-	-	-	-
시비	10,000	4,107	732	3,489	1,672

□ ‘21년까지 추진실적

○ 1897 개항문화가로조성 공사 추진 (4개소, L=2km)  : ‘21. 1 ~

○ 인큐베이팅 플랫폼 조성 추진             : ‘21. 1 ~

○ 모자아트갤러리 등 도보루트 조성 추진    : ‘21. 1 ~

○ 도시재생대학․공모사업 등 SW사업 추진    : ‘21. 1 ~

□ 향후 추진 계획

○ ‘22. 1 ~ : 1897 개항문화거리 도시재생 뉴딜사업 추진

- 개항문화가로 조성 및 다목적광장(주차장) 조성 완료

- 개항거리 어울림 플랫폼 및 인큐베이팅 플랫폼 공사 추진

- 개항문화거리 소공원․청년창업상가 조성 등

- S/W사업 추진 (역량강화, 거버넌스 구축, 지역특화축제 등)

□ 구 상 도

□ 조 감 도

목포 해변맛길 30리 조성사업

목포시만의 특색을 지닌 해변 명품 산책로를 만들고 주변 관광자원과 연계하여 걷기 좋은 도보여행 코스 구축

□ 개  요

○ 기    간 : 2020 ~ 2023

○ 위    치 : 평화광장~갓바위~남항~삼학도~목포항~해양대

○ 총사업비 : 10,000백만원 (균특전환 5,000, 시 5,000)

- 2021년 사업비 : 4,000백만원 (균특전환 2,000, 시 2,000)

○ 사업내용

구간	구간별 사업	위치 및 길이 (㎞)	도입 시설	비고
계		5구간, 12km
1	바닷가미술관길	평화광장~남항(2.6km)	조형미술관, 전망쉼터, 해변데크
2	환경보호생태길	남항~대삼학교(2.3km)	습지생태원, 철새관찰장, 갈대숲길
3	온가족나들이길	대삼학교~요트마리나(1.8km)	사계정원, 조형물, 포토존, 경관시설
4	개항역사문화길	요트마리나~목포항(2.4km)	어시장 상징물, 근대역사체험존, 해변쉼터
5	젊은 연인의 길	목포항~해양대(2.9km)	바다전망대, 바닷길 포토존, 안내판

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2021년	2022년	2023년이후
계	10,000	100	1,900	4,800	3,200
국비	-	-	-	-	-
도비	5,000	50	950	2,400	1,600
시비	5,000	50	950	2,400	1,600

□ ‘21년까지 추진실적

○ 목포 해변맛길 30리 1단계(2, 3구간) 개통

□ 향후 추진계획

○ 목포 해변맛길 30리 잔여(1, 4, 5)구간 사업추진 – 2022~2023년

□ 기대효과

○ 목포시만의 아름다운 해변풍광을 연결하는 도보여행길을 조성 관광객 및 시민들에게 특색있는 바닷길을 제공하고

○ 맛길 30리 주변 문화, 역사의 관광자원과 연계한 낭만과 맛이 있는 도보 관광자원을 통해 관광도시 이미지 향상 제고.

□ 위 치 도

1구간

2구간

3구간

4구간

5구간

□ 조감도

□ 완공사진

고하도 목화정원 조성사업

가족단위 관광객이 사계절 이용 가능한 목화정원을 조성하여 특색있는 지역문화 컨텐츠 발굴 및 고하도권 관광활성화 기여

□ 개  요

○ 기    간 : 2021. 3. ~ 10.

○ 위    치 : 목포시 달동 1332번지

○ 총사업비 : 1,000백만원 (국750, 시250)

○ 사업내용 : 실외정원 조성 1식

구 분	계	생활밀착형 숲(실외정원)	도심권 생활정원
사업규모	11,000㎡	6,000㎡	5,000㎡
사 업 비	10억원 (국 7.5, 시 2.5)	5억원(국 100%)	5억원(국 50%, 시 50%)
시행주체		산림청(한국수목원관리원)	지자체(목포)

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2021년	2022년	2023년이후
계	1,000	-	1,000	-	-
국비	750	-	750	-	-
도비	-	-	-	-	-
시비	250	-	250	-	-

□ ‘21년까지 추진실적

○ ‘21.  6. : 기본구상용역 완료(우리시 구간)

○ ‘21.  8. : 실시설계용역 완료 및 행정절차 이행(우리시 구간)

○ ‘21. 11. : 도심권 생활정원(우리시 구간) 공사 완료

□ 기대효과

○ 특색있는 지역문화 컨텐츠 발굴 및 고하도권 관광활성화 기여

□ 위 치 도

□ 완공사진 (조감도)