□ 특수공시 : 지역적 특성을 감안한 특수한 재정운용 상황에 대한 공시

지방재정 특수공시 대상사업 목록

【기준년도 : 2013년도】

연번	사 업 명	추진부서	비고
	10개 사업
1	부주동 주민센터 신축공사	회계과
2	종합장사시설 건립	노인장애인과
3	전통시장 현대화 사업	농상과
4	철도폐선부지 웰빙공원 조성	도시계획과
5	서남방송국～본옥동간 도로개설	도시계획과
6	신흥 재해위험지구 정비사업	건설방재과
7	양을산 산림욕장 조성	공원과
8	만호진 역사공원화 사업	문화예술과
9	노벨평화상 기념관 건립	문화예술과
10	용당배수 펌프장 신설	하수과

부주동 주민센터 신축공사

처리부서 : 회계과  담당자 : 김광선(☎270-3275)

옥암지구 인구증가로 인한 행정여건 변화에 따라 임시 청사로 운영중인 부주동 청사를 신축하여 주민편의 및 행정서비스 제고

□ 사업개요

○ 공사기간 : 2013. 4. 30 ～ 2013. 9. 25

○ 위    치 : 옥암동 1249번지(공공청사 부지)

○ 총사업비 : 1,574백만원 (전액시비 1,574)

- 2013년 사업비 : 1,574백만원

○ 사업내용

- 규모 및 구조 : 상2층, 연면적 991㎡, 철근콘크리트조

- 주요시설 : 민원실, 작은도서관, 다목적실, 주민사랑방, 동대본부 등

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2013년	2014년	2015년이후
계	1,574	-	1,574	-	-
국비	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-
시비	1,574	-	1,574	-	-

□ ‘13년까지 추진실적

○ 신축공사 기본 및 실시설계  :  2013. 2월

○ 건설기술심의(‘13. 4. 12) 및 계약심사 완료(‘13. 4. 16)

○ 공사착공 및 준공 : 2013. 4. 30 ～ 2013. 9. 25

○ 부주동 주민센터 개청 : 2013. 10. 31

□ 기대효과

○ 청사 신축에 따른 주민이용 공간확보로 주민센터 활성화 도모

○ 주민자치센터 운영에 따른 행정능률과 주민편의 제공

□ 위 치 도

신축부지

대우푸르지오

도 청

□ 완공사진

목포 종합장사시설 건립

처리부서 : 노인장애인과  담당자 : 윤주명(☎270-8862)

재래식 화장장 이전 숙원사업 해결과 장례문화의 선진화 및 확산을 위해 민․관 공동으로 장사시설 건립하여 One-Stop 장례서비스 제공

□ 개  요

○ 기    간 : 2010년 ~ 2015년(6년간)

○ 위    치 : 목포시 대양동 764-11번지 일원(부지 61,027㎡)

○ 총사업비 : 12,976백만원 (국5,721 도642 시6,613)

- 2013년 사업비 : 6,138백만원 (국2,996 도642 시2,500)

○ 사업내용 : 화장장 3,692㎡(화장로 6기), 봉안당 5천구, 유택동산 등

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2013년	2014년	2015년이후
계	12,976	2,608	6,638	3,730	-
국비	5,721	2,225	3,496	-	-
도비	642	-	642	-	-
시비	6,613	383	2,500	3,730	-

□ ‘13년까지 추진실적

○  장사시설 건립 설계용역 완료 및 실시계획인가

○  대지조성 및 토목공사

□ 향후 추진계획

○ 종합장사시설 건축공사 준공 : 15. 4

○ 화장장 시험가동 및 운영 : ‘15. 5 ~ 6

□ 기대효과

○ 최첨단 현대식 장사시설 건립으로 관련민원 해결

○ 장례문화에 대한 의식개선으로 화장률 제고

위 치 도

현대식 종합장사시설 건립

조 감 도

전통시장 현대화 사업

처리부서 : 농상과  담당자 : 김진명(☎270-3359)

전통시장의 시설 현대화를 추진하여 유통시설 개선과 기능강화로 경쟁력 제고 및 지역경제 활성화에 기여

□ 개  요

○ 기    간 : 2005년 ~ 지속

○ 위    치 : 관내 전통시장 7개소

○ 총사업비 : 36,642백만원 (국21,984  도    시14,658)

- 2013년 사업비 : 1,238백만원 (국743    도    시495)

○ 사업내용 : 아케이드 설치 등 전통시장 시설 현대화

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2013년	2014년	2015년이후
계	36,642	28,987	1,238	417	6,000
국비	21,984	17,392	742	250	3,600
도비
시비	14,658	11,595	496	167	2,400

□ ‘13년까지 추진실적

○ ‘05년 ~’12년 : 아케이드 설치 등 시설 현대화사업

○ ‘13년 : 신중앙시장 상하수도 공사 등 8개 사업

□ 향후 추진계획

○ 고객편의 시설 개보수 확충 : 전통시장 시설 현대화 사업 계속 추진

○ 시설현대화 사업과 경영현대화 사업의 병행 추진

□ 기대효과

○ 서민경제 회복 및 지역경제 활성화

○ 안전시설 보완 등으로 고객과 상인 안전확보

□ 위 치 도

□ 완공사진 (아케이드)

철도폐선부지 웰빙공원 조성

처리부서 : 도시계획과  담당자 : 김선웅(☎270-3447)

철도폐선부지를 웰빙공원으로 조성하여 시민편익 제공 및 건강증진에 기여

□ 개  요

○ 기    간 : 2006. 7. ~ 2014. 12.

○ 위    치 : 연동광장 ~ 옥암동 임성리역 앞

○ 총사업비 : 26,500백만원 (국 10,000 시 16,500)

- 2013년 사업비 : 3,360백만원 (국 1,830 시1,530)

○ 사업내용 : 공원조성 L=6.2km, A=172,637㎡

마을안길 조성 5개 노선 L=4.1km, B=6~15m

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2013년	2014년	2015년이후
계	26,500	14,620	3,360	5,510	3,010
국비	10,000	4,360	1,830	3,810	-
도비	-	-	-	-	-
시비	16,500	10,260	1,530	1,700	3,010

□ ‘13년까지 추진실적

○  청호, 동목포, 송림, 이로공원 L=5km 완료

○  마을안길 L=2.5km 완료

□ 향후 추진계획

○  '14.  7 : 석현공원 2차분 전라남도 계약심의 완료

○  '14.  8 : 석현공원 2차분 착공 L=664m(총공사비 23억, 보상비 13억)

마을안길(송림, 이로, 석현) L=506m, B=6~10m 추진(예정)

○  '14. 12 : 석현공원 2차분 및 마을안길 완공

○  '15. 12 : 철도폐선부지웰빙공원 전구간 유지관리 등 시설물 관리이관

□ 기대효과

○ 폐선부지를 웰빙공원으로 조성하여 시민 삶의 질 향상 및 건강 도시건설

□ 위 치 도

□ 완공사진(송림공원)

서남방송국 ~ 본옥동간 도로개설

처리부서 : 도시계획과  담당자 : 정재홍(☎270-3445)

원도심 북항권역과 신도심을 연결하는 도로를 개설하여 지역간 차량 소통 원활

□ 개  요

○ 기    간 : 2007. 2. ~ 2015. 6.

○ 위    치 : 구)서남방송국 ~ 본옥동간

○ 총사업비 : 12,674백만원 (전액시비 12,674)

- 2013년 사업비 : 2,300백만원 (전액시비 2,300)

○ 사업내용 : 도로개설(L=370m, B=20m)

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2013년	2014년	2015년이후
계	12,674	7,370	2,300	2,600	404
국비
도비
시비	12,674	7,370	2,300	2,600	404

□ ‘13년까지 추진실적

○ ‘06.  2. 27 : 실시설계 완료

○ ‘07.  1.  5 : 실시계획 인가고시

○ ‘07.  2 ~ ’13. 12 : 1 ~ 10차분 공사 완료(토공완료)

□ 향후 추진계획

○ ‘14.  7 ~ 10 : 표층포장 후 개통

○ ‘14. 10 ~ 12 : 방음벽 및 미끄럼방지포장

○ ‘14. 12 ~ ’15. 6 : 조경, 절개지 보강 및 기타부대시설 보완

□ 기대효과

○ 원도심 북항권역과 신도심을 연결하는 도로를 개설하여 지역간 차량 소통 원할

□ 위 치 도

구)서남방송국

종원나이스빌

서해초교

L=370m, B=20m

□ 현장사진

신흥재해위험지구 정비사업

처리부서 : 건설방재과  담당자 : 백무황(☎270-3338)

2007년 재해위험지구로 지정된 신흥동 도로절개지의 항구적인 복구를 위하여 신흥동 도로절개지 정비사업을 추진하고 함

□ 개  요

○ 기    간 : 2012. 3. 27 ~ 2013. 9. 24

○ 위    치 : 신흥동주민센터 앞 도로절개지 일원

○ 총사업비 : 1,922백만원 (국1,152, 시770)

- 2013년 사업비 : 962백만원 (국577, 시385)

○ 사업내용 : 절개지 정비 L=154.8m, B=10.7 ~ 16.2m

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2013년	2014년	2015년이후
계	1,922	960	962	-	-
국비	1,153	576	577	-	-
도비	-	-	-	-	-
시비	769	384	385	-	-

□ ‘13년까지 추진실적

○ 절개지 정비 L=74m, B=7.6 ~ 13.4m

○ 산마루 측구 L=36m, U형측구 L=147m등

□ 향후 추진계획

○ 2013. 9. 준공

□ 기대효과

○ 토사 및 낙석붕괴 방지로 사전 재해예방

□ 위 치 도

선 응 사

광장주유소

목포여자중학교

신흥동주민센터

갈보리 교회

선응사입구

재해위험지구

'07~‘09 L=100m

재해위험지구

'12~‘13 L=154.8m

□ 완공사진 (조감도)

양을산 산림욕장 조성사업

처리부서 : 공원과  담당자 : 전욱형(☎270-8344)

상동 제1수원지 주변 편백나무림을 중심으로 시민들이 편안하게 이용할 수 있는 산림욕장을 조성하여 환경교육, 산림체험등 질 높은 산림휴양서비스를 제공코자 함.

□ 개  요

○ 기    간 : 2012. 7. 12 ～ 2013. 5. 7

○ 위    치 : 목포시 상동 산 34-3번지 일원

○ 총사업비 : 2,000백만원 (국 1,000 도 300 시 700)

- 2013년 사업비 : 400백만원 (전액시비)

○ 사업내용 : 산림욕장 16ha 조성

- 계류 261.6㎡, 산책로 데크 879㎡, 목교 8개소, 야외무대 1개소,      너와정자 3, 대나무정자 1동, 등의자 10, 평상 18, 테이블벤치 10,    농구대 1, 화장실 2개소,

- 소나무 외 17종 8,431주, 구절초 외 13종 31,450주 식재

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년이후
계	2,000	650	950	400
국비	1,000	500	500
도비	300	150	150
시비	700	-	300	400

□ ‘13년까지 추진실적

○ 2011. 06.  29 : 조성계획 실시설계

○ 2012. 07.  09 : 산림욕장 조성사업 착 공

○ 2013. 09.  04 : 산림욕장 조성사업 준공

□ 기대효과

○ 양을산을 찾는 시민들에게 체험, 교육, 휴양등 다양하고 수준 높은 산림휴양 서비스 제공

□ 위 치 도

사업대상지

목포 실내체육관

목포 청소년수련관

□ 완공사진

목포진복원 및 역사공원 조성사업

처리부서 : 문화예술과  담당자 : 김용중(☎270-3542)

근대 개항도시로만 알려진 목포를 목포진 복원사업을 통해 역사적 가치를 높이고 관광자원으로 활용

□ 개  요

○ 기    간 : 2005년 ~ 2014년

○ 위    치 : 목포시 만호동 1-56번지 일원

○ 총사업비 : 7,300백만원(국비 2,700/도비 650/시비 2,750/특교세 1200)

- 2013년 사업비 : 650백만원 (국 - 도 150  시 500)

○ 사업내용 : 객사 및 내삼문 건립, 공원편의시설(조경시설물 등)

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2013년	2014년	2015년이후
계	7,300	3,400	500	3,400	-
국 비	2,700	1,100	300	2,000	-
도 비	650	200	100	350	-
시 비	2,750	900	100	1,750	-
특교세	1,200	1,200	-	-

□ ‘13년까지 추진실적

○ ‘05.  7월 : 목포진 복원 및 역사공원 조성사업 지표조사

○ ‘07.  4월 : 도시관리계획 변경을 통한 도시계획시설결정

○ ‘10. 11월 : 사업지구 토지․지장물 보상 및 철거

○ ‘12.  9월 : 목포진성의 복원과 활용방안 학술심포지엄 개최

○ ‘13. 11월 : 목포진 복원 및 역사공원 조성 실시설계용역 완료

○ ‘14.  2월 : 착 공

○ ‘14. 10월 : 준공예정

□ 기대효과

○ 목포진복원으로 목포의 역사적 가치와 위상을 높임

○ 원도심지역의 근대문화유산자원과 연계하여 관광활성화

□ 위 치 도

□ 조감도

노벨평화상기념관 건립

처리부서 : 문화예술과  담당자 : 김용중(☎270-3542)

유서깊은 삼학도에 기념관을 건립하여 우리지역의 상징성을 높이고 관광자원으로 활용

□ 개  요

○ 기    간 : 2011년 ~ 2013년

○ 위    치 : 목포시 삼학로 92번길 68

○ 총사업비 : 20,000백만원 (국 10,000   도 4,000  시 6,000)

- 2013년 사업비 : 12,000백만원 (국 6,000 도2,400 시,3600)

○ 사업내용 : 부지 15,600㎡, 연면적 4,677㎡(지상2층)

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2013년	2014년	2015년이후
계	20,000	8,000	12,000	-	-
국비	10,000	4,000	6,000	-	-
도비	4,000	1,600	2,400	-	-
시비	6,000	2,400	3,600	-	-

□ ‘13년까지 추진실적

○ ‘10. 09월 : 용역 추진사항 보고 (전남도지사, 목포시장 참석)

○ ‘11. 09월 : 건립공사 착공

○ ‘12. 11월 : 전시관 전시물 4,830점 확보(유품 130점 포함)

○ ‘13. 03월 : 재단법인설립 운영조례 제정

○ ‘13. 05월 : 준 공

○ ‘13. 06월 : 김대중노벨평화상기념관 개관

□ 기대효과

○ 청소년들에게 노벨평화상수상자의 혜를 배우는 학습공간 마련

○ 관광명소로 개발‧육성하여 지역경제 활성화 도모

□ 위 치 도

대삼학도 삼학도

중삼학도 삼학도

노벨평화상기념관 건립부지

소삼학도 삼학도

□ 완공사진 (조감도)

용당배수펌프장 신설공사

처리부서 : 하수과  담당자 : 윤재웅(☎270-3542)

재해위험지구로 지정된 용당지구에 대한 배수펌프장 신설을

통하여 만조시 해수면보다 낮은 저지대의 상습침수로부터 시민들의

재산피해 및 불편을 조기 해소

□ 개  요

○ 기    간 : 2009년 ~ 2013년

○ 위    치 : 목포시 용당동 106-번지 유달경기장 내

○ 총사업비 : 16,697백만원(국비 10,018, 시비 6,679)

- 2013년 사업비 : 4,133백만원(국 2,524, 시비 1,609)

○ 사업내용 : 배수펌프장 1동 (430HP×6대 Q=1,632㎥/분)

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구 분	총사업비	예산확보현황
		2011년까지	2012년	2013년
계	16,697	7,464	5,100	4,133
국 비	10,018	4,434	3,060	2,524
시 비	6,679	3,030	2,040	1,609

□ ‘13년까지 추진실적

○ ‘09.  5.  : 용당배수펌프장 신설공사 착공

○ ‘10.  2.  : 터파기 및 기초콘크리트 타설 완료 (1,2차분 완료)

○ ‘10.  6.   : 펌프장, 유수지(B)구간 지하구조물 및 상부슬래브 설치(3차분)

○ ‘10. 12.  : 유수지(1/2) A구간 기초콘크리트 타설 완료(4차분)

○ ‘11. 12.  : 유수지A구간완료, 건축골조공사 및 토출관로설치 공사(5차분) 완료

○ ‘12. 11.  : 유입수로 및 배수펌프1기설치 (6차분)

○ ‘13.  2.  : 마무리 잔여공사 착공 (7차분)

○ ‘13.  5.  : 공사 준공

□ 기대효과

○ 공공수역의 수질오염 예방

○ 저지대 상습침수문제의 근원적 해결

□ 위 치 도

□ 완공사진 (조감도)